Poznań, 04.09.2025 roku
Znak sprawy: Or-II.0003.1.254.2025
Nr rej.: 04092502491
Pani
Maria Lisiecka-Pawełczak
Radna Miasta Poznania
Szanowna Pani Radna,
odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem z 26 sierpnia 2025 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację Pani Radnej w sprawie harmonogramu inwestycji Lubczykowa/Naramowicka/Jemiołowa/Radojewo, uprzejmie informuję:
Inwestycja wskazana przez Panią Radną realizowana jest przez spółkę Poznańskie Inwestycje Miejskie i obejmuje przebudowę skrzyżowania ulic Radojewo, Naramowickiej, Lubczykowej i Łopianowej. Zakres zadania nie obejmuje natomiast ulicy Jemiołowej.
Prace związane z przebudową skrzyżowania prowadzone są etapowo, przy jednoczesnym utrzymaniu przejezdności. Obecnie w tej lokalizacji odbywa się ruch wahadłowy, który w miarę postępu robót będzie przenoszony na kolejne odcinki.
Orientacyjny harmonogram inwestycji przewiduje:
•	do połowy września br. zakończenie prac przy kanalizacji deszczowej i podbudowie bitumicznej na pierwszych odcinkach po zachodniej stronie ulicy Radojewo i ulicy Naramowickiej – ruch wahadłowy będzie utrzymany,
•	od połowy września br. do początku października br. realizację kolejnych etapów inwestycji po stronie wschodniej ulicy Radojewo i ulicy Naramowickiej wraz ze zmianą organizacji ruchu, o której mieszkańcy będą informowani na bieżąco (na stronie internetowej i poprzez komunikaty przesyłane do Rady Osiedla oraz poprzez wywieszanie informacji w terenie) – ruch wahadłowy będzie utrzymany,
•	w okresie od października br. do listopada br. prowadzenie robót na części wschodniej ulicy Naramowickiej oraz na ulicy Lubczykowej (z zachowaniem jej przejezdności), a także kolejnych fragmentach głównego odcinka po stronie wschodniej przy zmienionej organizacji ruchu – ruch wahadłowy będzie miejscami utrzymany,
•	w listopadzie br. i grudniu br. wykonanie ostatnich odcinków (na zmianę będzie realizowana część zachodnia ulicy Radojewo – przystanek, potem część wschodnia).
Równolegle trwają prace towarzyszące na poboczach, obejmujące m.in. budowę chodników, zjazdów, drogi rowerowej, przystanków, oświetlenia oraz sygnalizacji świetlnej. Należy podkreślić, że podane terminy mają charakter orientacyjny i mogą się zmienić m.in. ze względu na warunki pogodowe. Zakończenie zasadniczych robót drogowych planowane jest do końca bieżącego roku.
Z wyrazami szacunku
Z up. PREZYDENTA MIASTA
(-) Mariusz Wiśniewski
Z-CA PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta