Pan
Henryk Kania 
Radny Miasta Poznania

Poznań, 3 grudnia 2020 r.
Znak sprawy: Or-II.0003.1.347.2020
Nr rej.: 031220-1954

Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem   z dnia 24 listopada br. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pana Radnego w sprawie inwestycji oświetlenia ulicy Sypniewo, uprzejmie informuję:
W związku z brakiem kontaktu z projektantem oraz opóźnieniem w przekazaniu dokumentacji projektowej, umowa z projektantem została zerwana. W 2021 roku zostanie ogłoszony wybór nowego projektanta, który rozpocznie projektowanie oświetlenia od początku. W związku         z poprzednią umową Miasto nie poniosło żadnych kosztów finansowych oraz nie naliczyło kar, ponieważ umowa przewidywała wyłącznie kary za opóźnioną realizację, a nie za brak wykonania jej przedmiotu lub zerwanie.
Z wyrazami szacunku
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Mariusz Wiśniewski
Z-ca Prezydenta Miasta Poznania

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta