Poznań, 07.04.2021 r.

Pani
Klaudia Strzelecka
Radna Miasta Poznania

Znak sprawy: Or-II.0003.1.79.2021
Nr rej.: 070421-2409

Szanowna Pani Radna,

odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 26 marca 2021 r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia interpelację Pani Radnej w sprawie budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego, uprzejmie informuję:
Ad. 1. Jaka jest perspektywa budowy Muzeum?
Do końca 2021 roku gotowy będzie projekt wykonawczy (przygotowywany przez pracownię WXCA). W połowie roku Wielkopolskie Muzeum Niepodległości spodziewa się otrzymać także pozwolenie na budowę, ważne przez 3 lata. Do końca bieżącego roku zespół ekspertów przygotuje scenariusz wystawy stałej wraz z katalogiem eksponatów, jakie powinny znaleźć się w przyszłym Muzeum. Gdy sytuacja finansowa Miasta będzie stabilna, możliwe będzie rozpoczęcie kolejnego etapu - czyli ogłoszenie konkursu na projekt wystawy stałej.
Ad. 2. Czy Miasto weszło we współpracę z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w tej sprawie?
Miasto prowadziło z Ministerstwem rozmowy dotyczące współfinansowania inwestycji oraz procedur, jakie powinny temu procesowi towarzyszyć. Trudna sytuacja związana z pandemią uniemożliwia jednakże na ten moment składanie deklaracji dotyczących wysokości wkładu finansowego Miasta w realizowany projekt. 
Ad. 3. Jak Miasto zareagowało na chęć partycypacji w kosztach budowy Muzeum zadeklarowanej wstępnie przez ministra Jarosława Sellina?
Deklaracja złożona przez Ministra była przyczyną spotkania i rozmów z Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego w Ministerstwie - Panią Pauliną Florjanowicz – na temat współpracy w ramach projektowanej inwestycji. 
Poniżej przedstawiam informacje z zakresu budżetu oraz harmonogramu projektu budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego:
Harmonogram projektu budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919:

Działania dotyczące budynku: 	Termin realizacji:	
1.	Opracowanie założeń do scenariusza wystawy stałej. Przygotowanie konkursu architektonicznego 	styczeń 2017 r. – grudzień 2018 r.	
w tym:		
•	wybór lokalizacji Nowego Muzeum 	czerwiec 2018 r.	
2.	Konkurs architektoniczny	grudzień 2018 r. – lipiec 2019 r.	
3.	Prace projektowe	wrzesień 2019 r. – grudzień 2020 r.	
w tym:		
•	koncepcja wielobranżowa	kwiecień 2020 r.	
•	projekt budowlany	grudzień 2020 r./styczeń 2021 r.	
•	pozwolenie na budowę	III kwartał 2021 r.	
•	projekt wykonawczy / pełny projekt techniczny 	grudzień 2021 r.	
4.	Procedura przetargowa wyboru wykonawcy 		
5.	Roboty budowlane 	24 miesiące od zakończenia procedury wyboru wykonawcy: np. czerwiec 2022 r. - czerwiec 2024 r.	
Działania dotyczące wystawy stałej:		
1.	Przygotowanie konkursu aranżacji wystawy stałej	styczeń 2017 r. – grudzień 2021 r.	
w tym:		
•	opracowanie założeń do scenariusza wystawy stałej	marzec 2019 r.	
•	opracowanie wytycznych architektonicznych do wystawy stałej	listopad 2019 r.	
•	scenariusz wystawy stałej 	grudzień 2021 r.	
2.	Konkurs	styczeń 2022 r. – czerwiec 2022 r.	
3.	Prace projektowe	sierpień 2022 r. – sierpień 2023 r.	
4.	Wykonanie wystawy stałej: 	18 miesięcy od zakończenia procedury wyboru wykonawcy: np. styczeń 2024 r. - czerwiec 2025 r.	
Uruchomienie Nowego Muzeum 	grudzień 2025 r. – uruchomienie wystawy 	

Budżet:

1.	W dyspozycji Muzeum w latach 2017-2020: 5 599 000,00 zł
a)	w podziale na cel wydatkowania:
•	przygotowanie do konkursu architektonicznego i konkurs: 450 000,00 zł;
•	opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku: 4 500 000,00 zł;
•	zakupy eksponatów do Nowego Muzeum: 210 000,00 zł;
•	opracowanie założeń do scenariusza i scenariusza: 439 000,00 zł;
b)	w podziale na lata:
•	2017 rok: 146 000,00 zł;
•	2018 rok: 341 000,00 zł;
•	2019 rok: 564 000,00 zł;
•	2020 rok: 1 632 570,00 zł;
•	2021 rok: 2 915 430,00 zł;
c)	w podziale na źródła finasowania: 
•	Miasto Poznań: 5 199 000,00 zł;
•	Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu: 400 000,00 zł.

2.	Brakujący - niezbędny do zrealizowania inwestycji: 194 400 000,00 zł brutto
a)	W podziale na cel wydatkowania:
•	przygotowanie do konkursu na aranżację wystawy stałej: 400 000,00 zł;
•	opracowanie dokumentacji projektowej dla wystawy: 3 000 000,00 zł;
•	zakupy eksponatów do Nowego Muzeum: 5 000 000,00 zł;
•	roboty budowlane: 146 000 000,00 zł;
•	wystawa stała: 30 000 000,00 zł;
•	nadzory nad realizacją i zarządzanie: 10 000 000,00 zł;
b)	W podziale na lata:
•	2022 rok: 40 000 000,00 zł;
•	2023 rok: 75 000 000,00 zł;
•	2024 rok: 55 000 000,00 zł;
•	2025 rok: 24 400 000,00 zł.

Z wyrazami szacunku
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Jędrzej Solarski
Z-ca Prezydenta Miasta Poznania

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta