Poznań, 4 października 2021 r.
Nr sprawy: Or-II.0003.1.204.2021

Pani 
Klaudia Strzelecka
Radna Miasta Poznania

Nr rej.: 041021-3119

Szanowna Pani Radna,
odpowiadając na otrzymaną za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania pismem 
z dnia 20 września r. i przekazaną mi przez Prezydenta Miasta Poznania do rozpatrzenia interpelację Pani Radnej w sprawie wysypisk śmieci i kosztów ich wywożenia na budowanej trasie tramwajowej w kierunku Naramowic, uprzejmie wyjaśniam:
W trakcie budowy trasy tramwajowej zostało odnalezione jedno obszerne wysypisko w rejonie skrzyżowania ulic Naramowickiej i Lechickiej. 
Na zlecenie ZDM w latach 2008-2014 zostały przeprowadzone badania geologiczne, które w świetle obowiązujących przepisów i norm nie muszą obejmować badań jakościowych gruntu pod względem fizykochemicznym. Zgodnie z wymogami grunt w obrębie inwestycji zbadano pod kątem parametrów niezbędnych dla celów późniejszych prac projektowych – m.in. określono rodzaj gruntu, stopień zagęszczenia, wilgotność, poziom zwierciadła wody gruntowej. 
Zaznaczam, że już na etapie projektowym wskazano występowanie na przedmiotowym terenie nasypów niebudowlanych i potencjalną konieczność wymiany gruntu. Wykonawca prowadząc prace projektowe, miał świadomość jakości gruntów i do ich stanu dostosowywał rozwiązania techniczne. Przeprowadzone badania umożliwiały ocenę jakości gruntów, natomiast nie przesądzały 
o szczegółowych uwarunkowaniach geologicznych, nie mogły też określić prawdopodobieństwa wystąpienia potencjalnych wysypisk. W momencie realizacji robót i dokonania odkrycia przeprowadzono specjalistyczne badania, które przypisały materiał ziemny jako zalegające odpady niebezpieczne. Ponadto ze względu na fakt, że zanieczyszczony grunt zalegał również pod warstwami konstrukcyjnymi budowanej infrastruktury – budząc wątpliwości z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska – konieczne okazało się zrealizowanie dodatkowych prac, które nie zostały przewidziane w wynagrodzeniu podstawowym.
Kwota zabezpieczona w budżecie na wywóz odpadów z omawianego terenu wynosi ponad 80 mln zł, natomiast na obecnym etapie nie jest możliwe precyzyjne określenie ile wyniesie ostateczny koszt likwidacji przedmiotowego śmieciowiska. 

Z wyrazami szacunku
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Mariusz Wiśniewski
Z-ca Prezydenta Miasta Poznania

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta