Poznań, 04.08.2020 r.
Znak sprawy: Or-II.0003.1.219.2020

Pan
Łukasz Kapustka
Radny Miasta Poznania

Nr rej.: 040820-2125

Szanowny Panie Radny,
odpowiadając na otrzymane za pośrednictwem Przewodniczącego Rady Miasta pismem z dnia 24 lipca 2020 r. i przekazane mi przez Prezydenta Miasta do rozpatrzenia zapytanie Pana Radnego dotyczące doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Kurlandzkiej, uprzejmie informuję:
Środki na „Oświetlenie trzech przejść dla pieszych na ulicy Kurlandzkiej” zostały zapisane w planie finansowym ZDM w marcu 2019 roku w kwocie 75 000 zł. Pod koniec lutego 2019 roku nastąpiła zmiana procedury wprowadzania doświetleń przejść dla pieszych w mieście Poznaniu. Zdecydowano,                                   że Komisja Bezpieczeństwa Ruchu działająca przy Miejskim Inżynierze Ruchu (w skład której wchodzą przedstawiciele organów opiniujących projekty organizacji ruchu - m.in. ZDM, Policji, MIR) będzie określać zakres wprowadzanych zmian w rejonie doświetlanych przejść, ponieważ niektóre z nich zlokalizowane są w niewłaściwych miejscach, niebezpiecznych dla uczestników ruchu. 
Rada Osiedla Żegrze wskazała trzy przejścia dla pieszych wymagające doświetlenia: 
• przy pętli autobusowej nr 174,
• przy bloku na Os. Orła Białego 44 (na skrzyżowaniu z ul. Obodrzycką),
• przy budynku drukarni.
W związku ze zmianą procedury, ZDM przekazał wskazane lokalizacje przejść Komisji Bezpieczeństwa Ruchu, celem określenia dokładnego zakresu robót towarzyszących do zlecenia wykonawcy. W dniu 11 kwietnia 2019 r. Komisja podjęła decyzję, że przejścia przy pętli autobusowej nr 174 oraz przy bloku na Os. Orła Białego 44 (na skrzyżowaniu z ul. Obodrzycką) pozostają bez zmian. Z uwagi na fakt, że doświetlenia przejść wykonywane są w formule „zaprojektuj i wybuduj”, środki na to zadanie zostały przeniesione na rok 2020. Zadecydowano, że w pierwszej kolejności będą zlecone powyższe dwie lokalizacje. W dniu 13 marca 2020 r. Zarząd Dróg Miejskich podpisał umowę z wykonawcą                       na zaprojektowanie i wykonanie doświetlenia na kwotę 49 200 zł, z terminem realizacji – 30 października 2020 r. Projekt został już uzgodniony z ZDM i obecnie wykonawca uzyskuje zgłoszenie na roboty budowlane. 
W kwestii trzeciej lokalizacji (przy budynku drukarni), wyjaśniam, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. Komisja Bezpieczeństwa Ruchu podjęła decyzję o likwidacji przejścia dla pieszych w powyższej lokalizacji ze względów bezpieczeństwa oraz o doświetleniu następnego przejścia, które zlokalizowane jest w odległości ok. 30 m od przejścia likwidowanego. Dodatkowo koncepcja nowego rozwiązania przewidywała budowę chodnika od przejścia w kierunku drukarni. Zakres ten znacznie przekraczał zakładane wcześniej koszty inwestycji. Decyzję Komisji Bezpieczeństwa Ruchu przekazano Radzie Osiedla Żegrze drogą mailową w dniu 12 kwietnia 2019 r. Miejski Inżynier Ruchu zobowiązał się do wykonania projektu organizacji ruchu, wykonania niezbędnych uzgodnień i zatwierdzenia projektu. Projekt docelowej organizacji ruchu został ostatecznie zatwierdzony i przekazany do ZDM w dniu 20 sierpnia 2019 r. Zakłada on likwidację istniejącego przejścia, doświetlenie przejścia następnego (w odległości ok. 30 m od likwidowanego), wprowadzenie azylu dla pieszych, budowę nowego chodnika do drukarni i obniżenie krawężników. W dniu 15 kwietnia 2020 r. ZDM ogłosił zamówienie dla ww. lokalizacji. Na powyższy zakres robót wpłynęła jedna oferta, na kwotę 207 376,77 zł. Kwota ta znacznie przekracza wysokość środków przekazanych przez Radę Osiedla Żegrze, w związku z czym obecnie  ZDM prowadzi rozmowy z Miejskim Inżynierem Ruchu w celu zmniejszenia zakresu robót.

  Z wyrazami szacunku
Z up. Prezydenta Miasta
(-) Jędrzej Solarski
Z-ca Prezydenta Miasta Poznania

Do wiadomości:
Przewodniczący Rady Miasta